1. 민간투자사업의 개요

가. 사업명 : 서울신길5동우체국 등 9국 임대형 민자사업(BTL)

나. 사업위치 및 규모

지방청	총괄국	우체국명	사업유형	연면적(㎡)		위 치
				기존	계획
서울청	서울영등포	서울신길5동	개축	1,155.50	650.00	서울특별시 영등포구 신길동 446-3
	서울강서	서울발산동	개축	251.10	650.00	서울특별시 강서구 내발산동 701-13
부산청	거제	거제옥포동	개축	323.40	450.00	경상남도 거제시 옥포동 548-14
	진주	진주칠암동	개축	295.40	350.00	경상남도 진주시 칠암동 509-5
충청청	대전	대전도마동	개축	184.20	650.00	대전광역시 서구 도마동 173-18
	서청주	청주옥산	개축	285.60	300.00	충청북도 청주시 흥덕구 옥산면 오산리 545-5
전남청	광주	광주학동	개축	276.30	650.00	광주광역시 동학1동 110-2
전북청	동전주	전주에코시티	신축	-	650.00	전북특별자치도 전주시 덕진구 송천동2가 1515-10
경북청	포항	포항죽장	개축	320.70	250.00	경상북도 포항시 북구 죽장면 입암리 317-3
합 계				3,092.20	4,600.00

다. 사업에 필요한 비용 및 공사기간

구 분	총사업비 (백만원)	운영비 (백만원)	공사 기간	착공 예정일	준공 예정일 (운영개시일)
우체국 9개소	21,677	12,341	360일	2027. 7. 30.	2028. 7. 23. (2028. 7. 24.)

※ 공사기간 최종일정은 실시협약에서 정함

2. 시설사업기본계획의 주요내용

가. 사업신청자의 자격

○ 법인 또는 설립예정 법인으로서 총민간투자비의 5% 이상을 자기자본으로 조달하여야 함

나. 사업추진 방법

○ 「사회기반시설에 대한 민간투자법」 제4조2호에 의거 임대형 민자사업(BTL)방식

다. 관리운영권 설정기간: 20년

라. 정부지급금의 산정 및 지급

○ 정부지급금은 시설임대료와 운영비용으로 구성됩니다.

○ 시설임대료는 사업시행자가 투자한 민간투자비에 사업수익률이 반영된 투자원리금을 운영기간 중에 매년 분할하여 지급하는 구조로 산정됩니다.

○ 운영비용은 운영기간 중 투입되는 시설물의 운영, 유지비용 등을 합산한 비용으로 산정됩니다.

마. 사업신청서 평가 및 사업시행자 지정

○ 평가점수를 1,000점 만점으로 하되 항목별 배점은, 기술점수 510점(설계계획 300점, 건설계획 90점, 운영계획 120점), 공익성(출자자구성) 50점, 정부지급금 등 가격점수 440점으로 평가합니다.

○ 평가점수가 높은 순으로 우선협상대상자를 선정한 후 협상에 의해 사업시행자를 지정합니다.

3. 추진일정

일정	일시	장소	비고
자료배포	2026. 06. 11.(목) 부터	우정사업조달센터 홈페이지	배포가능한 자료 홈페이지에 게시
PQ질의 접수	2026. 06. 25.(목) 17:00까지	우정사업조달센터 건축설계과	공문포함 직접 또는 우편제출
PQ서류 접수	2026. 07. 09.(목) 15:00~17:00	우정사업조달센터 건축설계과	공문포함 직접 제출 (우편 제출 불가)
사업계획서 질의	2026. 07. 23.(목) 17:00까지	우정사업조달센터 건축설계과	공문포함 직접 또는 우편제출
사업계획서 접수	2026. 09. 10.(목) 15:00~17:00	우정사업조달센터 건축설계과	공문포함 직접 제출 (우편 제출 불가)

4. 기타사항

가. 이 시설사업기본계획의 상세내용은 우정사업조달센터 홈페이지를 참고 바랍니다.

나. 기타 문의사항은 우정사업조달센터 건축설계과(054-429-0220)로 문의하시기 바랍니다.