보상계획 설명서

1. 사 업 명 : “345㎸ 신용인-신수원, 신용인-삼성 송전선로 교체공사” 보상사업

2. 사업기간 : 사업승인일('19.04.10)～해당 사업의 공사완료일('2020.06.30예정)                 부터 2년까지

3. 사업구역 : 경기도 용인시 처인구 삼가동, 기흥구 지곡동, 공세동, 고매동,                경기도 화성시 중동 일원

4. 사업목적 : 송전선로 교체사업 주변지역의 ‘재산적 보상’ 및 ‘주택매수’를                   통하여 지역주민의 재산권을 보장하고 전력수급의 안정을 도모              함으로써 국민경제와 지역사회의 발전에 기여하기 위함

5. 사업개요

○ 송전선로 길이 : 5.224㎞

○ 공사기간 : '2019. 07월 ～ ‘2020. 06월 (12개월)

○ 재산적 보상 및 주택매수

구 분	보상 내용	보상범위
재산적보상	122필지(101,632㎡)	송전선로 양측 최외선부터 13m까지
주택 매수	2세대	송전선로 양측 최외선부터 60m까지

6. 사 업 비 : 약 24억원 (재산적 보상 : 15억, 주택매수 : 2세대)

7. 보상절차

측량 → 계획 수립 → 공고·열람·통지(신문,지자체,소유자) → 계획 확정·제출 → 관보고시 → 신청 접수 → 감정평가 → 보상금액 산정 → 협의 요청 → 보상

8. 보상일정

‘19.01 [측량] ⇨ ’19.07 [계획수립수립] ⇨ ’19.07 [신문공고·통지 등] ⇨ ‘20.03[계획 확정·제출] ⇨ ’20.05 [관보고시] ⇨ ‘20.05∼[신청접수→보상금산정→협의보상 시행]